제2국민체육센터 건립(변경)

관리번호 4-1					중앙(광역) 도움 필요성			□ 해당없음 □ 도움 필요(□ 제도 □ 재정 □ 권한)
사업기간	2022. 7. ~ 2027. 12.					추진상황	부지확보를 위한 절차 진행 중
신규여부	□ 신규 □ 계속		완료시기			□ 임기 내 □ 임기 후			예산구분	□ 예산 □ 비예산
이행단계	□ 보류(폐기) □ 추진 중 □ 완료 □ 완료 후, 지속 추진						사업주체		□ 국 □ 광역 □ 구(자체) □ 민간
주관부서	총무과 체육진흥계 차순영 (☎ 550-4484 )						협조부서		녹지공원과

1. 현    황

○ 동래구 서편(온천·사직지구) 대비, 동편(수민·안락·명장지구)에는 다양한 공공체육시설 부족

○ 주민들의 수영장형 체육시설 증설에 대한 요구 증대

2. 정책목표

○ 생활밀착형 제2국민체육센터 건립을 통한 건강한 행복도시 조성

3. 정책개요

○ 기    간 : 2022. 7. ~ 2027. 12.

○ 위    치 : 동래구 낙민동 일원

○ 규    모 : 연면적 7,000㎡, 지하 1층 ~ 지상 2층

○ 내    용 : 생활밀착형 제2국민체육센터 건립 ▸ 수영장, 헬스장 등 포함

○ 총사업비 : 350억원(국 30억원, 시 30억원, 구 290억원)

4. 연차별 추진계획

○

2022년	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
5%	20%	50%	70%	100%(착공)

추진 목표율

○ 분기별 로드맵

세부 추진사항	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년				2027
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
부지매입 계획 수립
부지확보 및 관련절차 이행
사전절차 이행 · 기본 및 실시설계 용역
착공
공사 및 착공

○ 세부 추진계획

- 2023. 7. ~ 2024. 4. : 부지확보를 위한 관련 행정절차 이행 등

- 2024. 5. : 국민체육센터 건립지원 공모 신청

- 2024. 6. ~ 2026. 5. : 설계 공모 등 관련 사전 절차 이행, 기본 및 실시설계 용역 등

- 2026. 6. : 제2국민체육센터 건립 착공

- 2026. 7. ~ 2027. 12. : 공사 및 준공

5. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	총사업비	기투자	계	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년 상반기	2026년 하반기~
총계	계	35,000		35,000		100		3,500	28,500	2,900
	국비	3,000		3,000				200	1,400	1,400
	시비	3,000		3,000					1,500	1,500
	구비	29,000		29,000		100		3,300	25,600
	기타(재원명)

○ 재원 조달 방안 : 국민체육센터 건립 지원 공모 신청(국 30억 원, 시 30억 원)

6. 공약달성 확인지표

세부 추진 사항	목표	단위	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년
부지매입 계획 수립	1	회	1
부지확보 및 관련절차 이행	1	식			1
제2국민체육센터 착공	1	식					1

7. 주민참여 및 소통실적

○ 제2국민체육센터 건립 관련, 설문조사 예정

○ 제2국민체육센터 관련, 설명회 예정

(단위 : 회)

계	설명회·공청회 등	설문조사	전문가 자문	언론보도	기타
2	1	1

8. 그간 추진사항

○ 2022. 8. ~ 9. : 제2국민체육센터 건립 관련 검토 보고 및 부지매입 계획 수립

○ 2022. 10. : 구 지방재정영향평가 심의(원안가결)

○ 2022. 10. : 2023년 공유재산관리계획 공유재산심의회 심의(원안가결)

○ 2022. 11. : 2023년 중기지방재정계획 반영

○ 2022. 11. : 2023년 공유재산관리계획 구의회 승인

○ 2023. 6. : 부산시장 접견 ⟶ 도시관리계획변경 및 시유지 사용(영구시설물 축조) 등 협조 요청

○ 2023. 6. : 건립부지 변경 계획 수립

○ 2023. 7. : 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역 발주

○ 2023. 8. : 市 공원정책과·시설계획과 협의 ⟶ 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 관련 논의

○ 2023. 8. : 제2국민체육센터 건립 기본계획 수립 용역 발주

9. 문제점 및 대책

○ 문 제 점

- 부지확보를 위한 관련 행정절차 이행에 따른 사업 지연

- 열악한 구 재정 상황으로 인해 사업 추진을 위한 예산 확보의 어려움

○ 대    책

- 市유관부서에 적극적인 협조 요청

- 국·시비 등 재원확보를 위한 공모사업 신청

10. 기대효과

○ 주민들을 위한 커뮤니티 공간 및 체육 여가 활동의 장을 마련하여 동래구 균형          발전에 기여